황남 공영주차장 및 안강읍 화물자동차 공영차고지 조성 추진 현황

	경 주 시 교통행정과

1	경주 문화관광 통합환승주차장(황남) 조성

□ 위    치 : 경주시 사정동 428번지 일원

□ 사업기간 : 2019 ~ 2023년(5년간)

□ 총사업비 : 180억원(균특 44, 시비 136)

□ 사업내용 : 주차장 조성 47,264㎡, 주차면수 1,100대

추진 경과

◦ 2020.  3. : 황남・사정동 일원 주차수급실태 용역 완료

◦ 2020.  4. : 기본계획수립 및 타당성조사 용역 완료

◦ 2020. 11. : 지방재정투자심사 완료(경북도, 180억원)

◦ 2021.  6. : 문화재현상변경 허가 완료

◦ 2021. 10. : 도시관리계획 결정(변경) 주민공람, 부서협의, 시의회 의견청취

◦ 2021. 11. : 토지 보상 위탁 협약 체결(한국부동산원)

◦ 2021. 12. : 시(市) 도시계획위원회 자문(용도지역 변경) 및 심의 (도시계획시설 결정)

◦ 2022.  2. : 경상북도 관련부서 협의

◦ 2022.  3. : 경북도 도시계획위원회 도시관리계획 심의(원안가결)

※ 용도지역 변경 심의(보전녹지지역 → 자연녹지지역)

향후 계획

◦ 2022.  4. : 도시관리계획 결정(변경-용도지역, 도시계획시설) 및 지형도면 고시

◦ 2022.  5. ~ : 보상계획 열람공고 및 보상협의(한국부동산원)

◦ 2023.  1. ~ : 문화재 시․발굴 조사

◦ 2023.  6. ~ 2024. 12. : 공사 착수 및 완료

2	안강읍 화물자동차 공영차고지 조성

□ 위    치 : 경주시 안강읍 산대리 1004번지 일원

□ 사업기간 : 2019 ~ 2024년(6년간)

□ 총사업비 : 85억원(균특 40, 시비 45)

□ 사업내용 : 주차장 조성 42,107㎡, 주차면수 340대

추진 경과

◦ 2018. 10. : 기본계획 및 타당성조사 용역시행

◦ 2019. 11. : 지방재정투자심사 완료(경북도, 85억원)

◦ 2021. 10. : 도시관리계획 결정(변경) 주민공람, 부서협의, 시의회 의견청취

◦ 2021. 11. : 토지 보상 위탁 협약 체결(한국부동산원)

◦ 2021. 12. : 시(市) 도시계획위원회 자문(용도지역 변경) 및 심의(도시계획시설 결정)

◦ 2022.  2. : 경상북도 관련부서 협의

◦ 2022.  3. : 경북도 도시계획위원회 도시관리계획 심의(원안가결)

※ 용도지역 변경 심의(생산녹지지역 → 자연녹지지역)

향후 계획

◦ 2022.  4. : 도시관리계획 결정(변경-용도지역, 도시계획시설) 및 지형도면 고시

◦ 2022.  6. ~ : 보상계획 열람공고 및 보상협의(한국부동산원)

◦ 2023.  6. ~ 2024. 12. : 공사 착수 및 완료